부천소방서 의무소방대기실 개보수 공사

설계용역 과업지시서

부천소방서

(소방행정과)

- 목    차 -

제1장  설 계 개 요

제2장  설계 작성지침

제3장  일 반 사 항

설계 용역 과업지시서

Gyeonggi Provincial Fire Disaster Headquarter

제1장 설계개요

1. 용 역 명 : 부천소방서 의무소방대 대기실 개보수 공사 설계 용역

2. 사업목적 : 의무소방대기실 개보수 공사를 통한 근무환경개선

3. 사업개요

가. 위    치 : 경기도 부천시 신흥로 115 부천소방서 2층 의무소방대기실

나. 사업내용 : 의무소방대기실 내부인테리어 공사

4. 설계방향

가. 대기실환경개선에 대한 충분한 이해를 통한 계획 및 설계

나. 설계도면 내부 구획(집기류 배치 포함) 담당자에게 검토를 맡은 후 진행

다. 발주처에서 제시하는 계획 및 지침, 충분한 협의에 의거한 설계

5. 내역산정

가. 예산액 : 금58,000천원(부가세포함)

나. 기초설계비 : 금5,486,790원(금오백사십팔만육천칠백구십원) ※VAT포함, 직선보간법

다. 공사금액(예산액-기초설계비) : 금52,513천원

위치	예산액	기초설계비	공사추정액 (예산액-기초설계비)
부천소방서 2층 의무소방대기실	58,000,000	5,486,790	52,513,210

- 제시된 공사비는 건축, 기계설비, 전기, 폐기물 등에 대한 총 공사비이이며(가스 등)

인입비용을 조사하여 시설분담금 등을 시설비에 포함.

- 공사금액(예산액-기초설계비) 금액 이내로 설계

6. 과업기간 : 착수일로부터 35일로 한다.(공휴일 포함)

가. 본 과업의 수행기간은 35일이며, 성과품을 납품함으로써 과업은 종료된 것으로 본다.

- 기본설계도서 납품 : 계약일로부터 10일 이내(기본설계도서 검토 및 수정 포함)

- 실시설계도서 납품 : 계약일로부터 20일 이내(실시설계도서 검토 및 수정 포함)

7. 관련법규등 검토 및 인허가사항

가. 공공건축물 공사발주 업무 매뉴얼(경기도건설본부)

나. 건설기술진흥법 제39조, 동법 시행령 제59조, 동법 시행규칙 34조

다. 공사기간의 산정(공공 건설공사의 공사기간 산정기준)

라. 인허가 건축 협의(건축법 제29조, 동법 시행령 22조)

마. 설계안전성검토(건설기술진흥법 시행령 제75조)

※ 상기사항 설계용역 완료 전·후라도 설계용역과 관련한 각종 협의업무(인허가 사항 포함) 및 관련 자료의     작성 및 제출과 설계 미비(당해 종료 후 차후년 발주로 단가 변경 포함) 및 하자에 대하여는 그 내용이      완료될 때까지 별도 수행하여야함.

※ 인허가에 필요한 모든 제반비용은 계약상대자가 부담하여야 함.

8. 과업수행 기간을 연장 또는 정지(발주자 승인 득함)

가. 천재지변 또는 불가항력적 사태로 인하여 용역수행이 불가능한 경우

나. 정부 및 발주자의 방침에 의하여 과업시행이 중단되었을 경우

다. 발주자의 사업계획 변경으로 과업내용이 변경되었을 경우

라. 관련기관(부서)의 협의, 자문, 심의, 검토 등 기간이 소요된 경우

마. 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능한 경우

제2장 설계작성지침

1. 설계기본계획사항

가. 본 사업은 목적과 특성을 고려하여 현재 상황을 문제점(취침공간 및 휴게공간의 분리)을 감

안하여 효율성이 뛰어나도록 설계하여야 한다.

나. 부착물 및 집기류를 제거하여야 하며, 향후 실내디자인 공간 구성 시 장애를 주지 않도록 설계하여야 한다.

다. 내․외부 마감재 사용은 안전성, 내구성, 단열성, 불연성 등을 우선 반영하며 방화, 자연채광, 환기 등을 고려하여야하며 향후 실내장식 및 공간구성 등 수용시설의 변화에 적절히 대응할 수 있도록 공간의 호환성과 유연성을 최대한 고려하여야 한다.

2. 설계기준

가. 본 설계는 건설부 제정 각종 시방서 건설 공사 표준 품셈과 본 설계지침 및 기타

사항에 의거 실시한다.

나. 건설 물가 적용은 2021년도 조달청 고시가격을 원칙으로 하며 고시되지 않은 품목의

단가는 일반 건설 물가지 또는 2개회사이상의 견적서 등 최저가격을 적용하며 노임은

시중노임 단가를 적용한다.

다. 관급자재 구매품목은 조달청 등록제품중 선정기준을 만족하는 업체 현황을 작성하여

업체 견적기준가로 작성한다.

라. 사용자재는 가능한 KS규격으로 성능이 우수하고 유지・관리가 용이하며 불가피한 경우를        제외하고는 국내에서 생산되는 자재를 사용하도록 한다.

3. 설계시행방법

가. 용역자는 담당자와 충분한 협의를 하며 세부적인 계획을 선정하여 각 분야별 설계에 있어서 특수성 및 중요성이 요구되는 것은 그 이유을 작성하여 담당자와 협의 확정한 후 경제적이고 합리적인 안을 채택하여 설계한다.

나. 용역자는 계약과 동시에 설계 착수하여야 하며 설계추진 공정표를 제출하고 진행사항을 수시로 담당자에게 보고한다.

다. 본 설계를 수행함에 있어 용역자는 책임 하에 필요한 조치를 취하여 설계도서의 보안 유지에 철저를 기하여야 한다.

라. 도급자는 납품시 각종 계산서 및 산출서에 대한 책임을 져야하며, 또한 공사별 및

건물 동별로 구분하여 물량을 산출하고 불합리적인 설계 및 물량 산출이 있을

경우도급자 부담으로 수정 또는 보충 설계를 하여야 한다.

마. 용역자는 본 설계 지침서에 누락되어 있거나 필요한 사항은 담당자와 협의 후 지시에 따른다.

바. 용역자는 담당자의 요구시, 필요한 모든 자료를 제출하여야 한다.

사. 건축법 및 건설기술진흥법 등 관련법에서 정하는 기준에 적합하게 작성한다.

4. 과업범위

가. 기본설계

- 조사 및 자료수집 : 현지답사, 국내외 선진사례조사, 측량조사, 지반조사, 관련 계획 자료 조사

(규모, 형태, 기능, 예산을 고려한 배치 등)

나. 실시설계

- 기본설계를 바탕으로 공사 시행에 필요한 실시설계도서 작성(시공에 필요한 사항 명기)

- 시방서 작성 및 공사비 산출

- 본 과업지시서에 의한 일체의 설계도서 작성

- 기본 및 실시설계에 수반되는 각종 관련조사 및 토지, 건축, 전기수도 등 인허가에 필요한 각종   구비서류 및 도면작성 등

5. 성과품의 제출

가. 실시설계도서

구 분		원본	사본	비고
설계도면	A3(반책제본)	1부	3부	원본:도면박스제출
시방서		1부	3부	원본:3공바인더제출
설계내역서		1부	3부
일위대가표, 수량산출서, 단가산출표		1부	3부
물량산출조서		1부	3부
실시설계설명서		1부	3부
공정표		1부	3부
CD,USB		각1점	부천소방서 기존 자료 포함하여 작성

※기타 감독관이 요구하는 자료 제출 하여야함.

제3장 일반사항

1. 목    적 : 계약자에게 설계용역을 시행하는데 필요한 기준과 지침을 제시하여 설계과정에서 야기     될 수 있는 행정과 기술상의 부조화 또는 차질을 사전에 통제함으로써 능률적인 설계작성 활동을       촉진함에 있다.

2. 용    어

가. 용역자 : 설계용역 책임을 맡은 용역계약자를 말한다.

나. 감독원 : 계약된 설계전반에 걸친 지시승인 및 기타 총괄적인 감독의무를 수행하기 위하여    임명 또는 위임한 공무원을 말한다.

3. 설계도 작성

가. 설계도서작성은 계약으로써 요구한 사항에 한하여 본 설계 과업지시서에 따라 설계도서를 작성하여야 한다.

나. 공정계획 보고

- 건축사는 설계 착수건에 상세한 설계작성 시행계획을 제출하여 발주처의 사전 승인을 맡아야

하며 시행계획에 따라서 작업을 진행하여야 한다.

다. 설계작업기간의 단축을 고려하여 설계작업 진행도중 부천소방서 감독자는 수시로 문제점을     협의하여 작성된 작품내용에 대하여 검토와 수정을 할 수 있다.

※ 계약상대자는 매주 1회 이상 발주자에게 서면 보고하여야함.

라. 설계에 필요한 각종조사 및 시험을 건축사의 비용으로 실시한다.

4. 납품 및 검수

최종 설계도서는 부천소방서 검수원이 충분히 검수할 수 있도록 계약납품일 이전에

제출하여 검사를 받은 다음 완료일까지 제출한다.

5. 중간납품

시공 시행 계획에 따라 부천소방서가 필요하다고 인정하여 요구했을 때는 이에 응하여야 한다.

6. 설계서 원도 및 산출근거(공사비 계산 및 기타자료) 원본은 최종 납품과 함께 제출하여야 한다.

7. 법규준수 및 설계책임

가. 설계내용은 관계법규와 제반규정에 저촉되지 않아야 하며 설계자는 관련법의 규정에 따라 제출된       도서에 대하여 잘못된 사항이 발생시 일체의 책임을 지며, 보완이 될 수 있도록 하여야 한다.

나. 용역자는 공사 추진 또는 하자발생시 시공자간의 분쟁이 없도록 각 공종별 업무범위를 명확히

구분ㆍ설계하여야 한다.

8. 설계자료 조사

가. 설계용역자는 설계자료를 성실하게 조사하여야 한다.

나. 설계용역자는 설계를 진행함에 있어 충분한 자료를 수집하여 질을 높여야 하며, 안전하고 합리적이며 경제적인 최신시설의 리모델링 공사가 되도록 하여야 하고 모든 자재는 불가피한 경우를 제외하고 국산품 및 에너지절약 효율기자재 사용을 원칙으로 한다.

9. 회의참석 등

설계용역자는 본 과업과 관련된 각종 기술심의 및 보고회 개최시 자료를 제출하여야 하며       회의에 참석하여 설명하고, 각 분야별 기술사항에 대해서는 책임기술자로 하여금 질의에 대하여 답변해야 함은 물론 회의결과에 대하여는 설계에 적극 반영하여야 한다.

10. 용역착수 시 제출서류

가. 용역착수 시

- 착수계

- 분야별 참여기술자 보안 각서

- 책임기술자 선임계(경력증명서, 기술자격증 사본, 재직증명서 첨부)

- 분야별 참여기술자 명단(경력증명서, 기술자격증 사본, 재직증명서 첨부)

※ 경력증명서 : 공인기관에서 발행하는 경력증명서 원본 첨부

- 인력 및 장비투입계획서

- 설계용역 공정예정표

- 기타 발주청이 필요하다고 인정하는 사항

나. 용역진행 중

- 용역의 진도보고 : 주간공정보고

- 본 과업을 수행함에 있어서 발생되는 문제점 및 이에 대한 해결방안(필요시)

- 기타 용역수행에 필요한 사항 : 업무협의결과 보고서

다. 용역완료 시(제2장 설계작성 지침 5)

- 기타 설계 수행 상 또는 감독 공무원이 필요하다고 인정되어 지시하는 사항

11. 과업참여자 수행관련 사항

가. 과업수행 참여자는 착수계 제출 이후 과업 종료 시까지 발주자의 사전승인 없이 임의 교체할 수 없다.    발주자의 사전승인 없이 과업수행 참여자의 교체가 있을 경우 당해 과업수행 참여자 및 계약    상대자에 대하여는 발주자가 제재를 가할 수 있으며, 계약상대자는 이 사실에 대하여 이의를    제기하지 못한다.

나. 계약상대자가 과업과 관련하여 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였을 경우에 모든 책임은    계약상대자가 부담한다.

다. 각종 성과품의 수록내용 및 편집순위 등에 대하여는 사전에 발주자와 협의하여야 하며, 본 과업    수행에 대한 감사기관의 처분결정 등이 있을 시는 이에 따라야 한다.

라. 발주자는 용역책임기술자 및 분야별 투입기술자가 과업수행에 부적당하다고 인정될 경우에는    즉시 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 따라야 한다.

마. 용역업무 수행 중 발주자와 과업이행에 대한 이견이 있을 경우 쌍방간 협의하고, 의견이 상이    할 경우 발주자의 의견에 따른다.

바. 본 과업지시서에 명기되지 않은 경미한 사항 및 부대업무에 대하여 발주자의 요구가 있을 시    계약상대자의 부담으로 이에 응하여야 한다.

사. 계약상대자는 성과품 납품 후에도 관련법규 미적용 등으로 누락 및 미비사항이 있거나, 성과    품의 오류 등이 발견될 때에는 계약상대자의 부담으로 보완 재작성하여야 한다.

아. 계약상대자의 사정으로 과업수행이 불가능하다고 인정되는 경우와 과업지시 사항을 위반하는    경우, 발주자의 지시에 따르지 않고 과업수행을 진행하는 경우는 계약을 해지할 수 있다.

자. 본 과업지시서의 내용에 대하여 해석차이가 있을시 부천소방서의 해석에 따른다.

붙임 1.착공신고서

2.분야별 참여 기술자 보안 각서

3.책임기술자 선임계

4.참여기술자 명단

5.주간공정보고

【붙임 1】

착 공(수) 신 고 서

공 사 명(용역명) :

계약금액 : 금

계 약 일 :

착 공(수) 일 :

준 공 일 :

위와 같이 착수(공)계를 제출합니다.

년     월     일

상    호

주    소

대 표 자

부천소방서 (분임)재무관 귀하

【붙임 2】

분야별 참여기술자 보안 각서

용  역  명 : 부천소방서 의무소방대 대기실 개보수 공사 설계 용역

용역착수일 : 2021.   .    .

용역준공일 : 2021.   .    .

아래의 본인은 상기의 설계용역을 수행함에 있어 취득한 자료와 성과물을 유출(제공, 대여, 분실 등)할시 민ㆍ형사상의 책임을 질 것을 각서로 제출합니다.

-- 아      래 --

성 명	공 종	생년월일	주 소	서 명	비 고
	건축(토목)
	기계
	전기
	통신
	소방

계 약 자

상    호 :

주    소 :

날    짜 : 2020.    .     .

대표이사 :                (인)

부천소방서 (분임)재무관 귀하

【붙임 3】

책임기술자 선임계

성        명 :

소        속 :

주        소 :

기술면허종별 :

면 허  번 호 :

연   락   처 :

상기인을 「부천소방서 의무소방대 대기실 개보수 공사 설계 용역」의 책임기술자로 선임하여 제출하오니 승인하여 주시기 바라오며 책임기술자가 수행한 일체의 행위에 대하여 계약자는 책임을 질 것을 서약합니다.

계 약 자

상    호 :

주    소 :

날    짜 : 2020.    .     .

대표이사 :                (인)

부천소방서 (분임)재무관 귀하

【붙임 4】

참여기술자 명단

○ 용 역 명 : 부천소방서 의무소방대 대기실 개보수 공사 설계 용역

○ 용역기간 :

○ 용역참여자(총괄ㆍ분야별 책임 및 참여기술자)

분야별	참여 기술자						서명 (실명)
	소속업체명	참여업무 내 용	참여기간	성 명	주민등록 번 호	자격증번호
건축 (토목)
기계
전기
소방
통신

부천소방서 (분임)재무관 귀하

【붙임 5】

주간 공정보고

○ 용 역 명 : 부천소방서 의무소방대 대기실 개보수 공사 설계 용역

○ 용역기간 : 2020.   .   . ~ 2020.   .   .

○ 보 고 자 : 책임기술자            (인)

○ 용역진행사항

구 분	전 주 결 과 ( . . . ~ . . . )	금 주 계 획 ( . . . ~ . . . )	비고
업무내용	- 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방등 공종별 작업내용작성
※주요보고사항	각종 회의사항 : 주요안건 및 결론 설계변경사항 등 주요 문제점 및 대책
공정률	예정	실시

부천소방서 (분임)재무관 귀하