		시흥 월곶 119안전센터(신축) 추진 현황

□ 사업개요

○ 위    치 : 경기도 시흥시 배곧동 206-1

○ 사 업 량 : 부지(1,586㎡, 480평) 건축(997㎡, 303평), 2층

○ 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 2023. 12. 30.(준공예정)

○ 사 업 비 : 5,224,010천원(부지 1,369,000천원, 건축 3,679,423천원, 자산 175,587천원)

	총사업비 편성내역(3년 계속비)
‣20년도(258,257천원) : 부지매입비(10%) 136,900천원, 설계비 121,357천원 ‣21년도(2,904,533천원) : 부지매입비 1,232,100천원, 건축비 1,610,928천원, 감리비 55,705천원, 시설부대비 5,800천원 ‣21년도 2추경(239,807천원) : 감리비 239,807천원 ‣22년도(1,821,413천원) : 건축 1,444,952천원, 감리 197,008천원, 시설부대비 3,866천원, 자산 175,587천원

□ 추진현황

○ 2019. 10. 21. : 공유재산관리계획 심의

○ 2021. 01. 15. : 부지매입 완료

○ 2020. 09. 09. : 설계용역 계약(106,289천원 / ‘20.9.11. ~ ‘22.08.31.)

○ 2022. 05. 31. : 계약심사 완료(건축, 기계)

○ 2022. 07. 27. : 건설본부 공사 의뢰

○ 2022. 10. 24. : 공사착공

□ 현 추진사항 (現 공정율 5%)

○ 기초공사 완료, ’23. 01. 09. : 동절기 공사중지

□ 향후계획

○ 2023. 02월중 공사재개(기상상황에 따른 변동 가능)

○ 2023. 12. 30. : 공사준공 예정